서울특별시 송파구 공고 제2024-39호

방이동 금호빌라 가로주택정비사업

사업시행계획(변경)인가 고시

서울특별시 송파구 방이동 152-19 외 4필지 금호빌라 가로주택정비사업 조합으로부터 사업시행계획(변경)인가 신청에 대하여 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」  제29조제1항의 규정에 의거 사업시행계획(변경)인가하고, 같은 법 제29조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 규정에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2024년 5월 16일

송 파 구 청 장

1. 사업의 종류 및 명칭 : 방이동 금호빌라 가로주택정비사업

2. 사업시행구역의 위치 및 면적

- 송파구 방이동 [152-16~19, 152-7(5필지)] / 1,039.60㎡

3. 사업의 종류 및 명칭

- 방이동 금호빌라 가로주택정비사업조합 조합장 박중묵

- 주된 사무소의 소재지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 383, 2층      (송파동, 성일빌딩)

4. 사업의 시행기간 : 사업시행계획인가일로부터 36개월

5. 사업시행계획인가일 : 2021. 6. 7.

6. 사업시행계획 변경의 사유 및 내용

가. 변경의 사유 : 주택도시보증공사와의 협의에 따른 일반분양세대 10세대 중 9세대의 분양가액을 정비사업비의 예비비로 편성하여 조합원 전체 분담금을 증액하고, 사업비 변경으로 인한 조합원 분담시기 변경, 공기연장으로인한 사업시행기간 연장함

나. 주요변경 내용

항목	변경전 (‘23.7.19. 사업시행계획인가)	변경후 (‘24.4.12.사업시행계획변경인가접수)	비고
시행기간	사업시행인가일부터 34개월 (2024년 3월까지)	사업시행인가일부터 36개월 (2024년 5월까지)
수입 추산액	20,709,325천원	21,009,325천원	증 300,000천원
공통부담 소요비용	10,000,000천원	14,343,500천원	증 4,343,500천원
비례율	96.96%	60.35%	감 36.61%
징수 청산총액	5,805,200천원	9,848,700천원	증 4,043,500천원

7. 기타 관계서류는 송파구청 주택사업과(☎02-2147-2904)에 비치 보관